109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 장흥군에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

연번	사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
			기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
1	천연물원재료 GAP/GMP 연계처리시스템 구축	10,000	400	4,600	5,000	-	2020	2019년	70%
2	정남진 종합스포츠타운 조성사업	18,000	-	-	3.000	15.000	2023	2019년	10%
3	(옛)장흥교도소를 활용한 문화예술 복합공간 조성사업	10,300	-	-	2,600	7,700	2024	2019년	15%
4	회령진성 복원 정비 사업	13,500	555	75	128	12,742	2024	2019년	20%
5	읍면 마을방송시스템 구축	3,428	623	2,805	-	-	2019	2019년	100%
6	회진시장 시설현대화사업	2,000				2,000	2021	2019년	-
7	군계획도로 (중로1-3호선) 개설공사	3,907	2,637	770		1,270	2021	2019년	30%
8	2019 대한민국산림 문화박람회	1,000	-	1,000	-	-	-	2019년	100%

연번	사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
			기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
9	김 육상채묘 및 냉동망 시설	2,000	-	-	2,000	-	2020년	2019년	50%
10	수목부산물 유용자원화센터조성	3,000	-	3,000	-	-	2020년	2019년	60%
11	농업기술센터 청사이전 건립	11,400	0	0	2,400	9,000	2022년	2019년	-
12	화장품 천연오일 원료추출 및 표준화 기반구축	10,000	-	-	1,000	9,000	2022	2019년	10%
13	역사향기숲 테마공원 조성사업	10,000	-	-	1,200	8,200	2022년	2019년	3%
14	전남도립대학교 장흥캠퍼스 소유권 이전	10,000	-	-	-	10,000	중장기	2019년	0%
15	군민회관 신축 이전 부지 매입	5,400				5,400	2021년 이후	2019년	0%
16	장애인시설 복합단지 조성	5,500	-	1,433	1,210	2,857	2021년	2019년	26%
17	장흥군 보훈 및 행정 복지타운 건립	3,500	-	844	-	2,656	2021년	2019년	24%
18	어류부산물 활용 친환경 배합사료 공장건립	4,000	-	200	3,800	-	220	2019년	30%
19	노후어업지도선 대체 건조	3,000	0	0	0	0	-	2019년	0%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘19년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨)

10-2. 지방채 발행사업

해당없음

10-3. 민간투자사업

우리 장흥군에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2019년	2020년	2021년 이후
BTL	장흥군 하수관거시설	장흥 친환경(주)	71,404	27,780	3,217	3,217	35,387	2011.3 ~ 2031.3
BTO	장흥군 하수종말처리장	장흥 친환경(주)	30,626	13,474	2,251	2,445	30,338	2011.3 ~ 2031.3

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2020년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황 1

사업명

하수관거(BTL) 정비사업

담당자

수도사업소 조문호(☎860-6681)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공하수관로 정비를 통한 보건환경 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011.3. ∼ 2031. 3. ○ 위    치 : 장흥읍외 3개 읍면

○ 민간사업자 : 장흥친환경주식회사

○ 총사업비 : 71,404 백만원      ○ 사업규모 : 76.6km

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	69,601	27,780	3,217	3,217	35,387
국 비	47,329	18,890	2,188	2,188	24,063
시 도 비
시군구비	22,272	8,890	1,029	1,029	11,324
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영중

□ 향후계획

○ 공공하수관로 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 민간투자사업 현황 2

사업명

하수종말처리시설(BTO)

담당자

수도사업소 조문호(☎860-6681)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공하수처리시설 운영으로 생활하수의 적정처리

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011.3. ∼ 2031. 3. ○ 위    치 : 장흥읍외 3개 읍면

○ 민간사업자 : 장흥친환경주식회사

○ 총사업비 : 30,626 백만원      ○ 사업규모 :  4개소 6,400톤/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	48,508	13,474	2,251	2,445	30,338
국 비
시 도 비
시군구비	48,508	13,474	2,251	2,445	30,338
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영중

□ 향후계획

○ 공공하수처리시설 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음